2014. 7. 21.(월) 14:00

고성군청 중회의실

군정 현안사업 보고자료

고  성  군

목  차

[기획감사실]	고성화력발전소 건설 2
[교육복지과]	기숙형중학교 건립 및 진입도로 개설공사 4
[문화관광체육과]	수남유수지 생태공원 조성사업 6
[특구경제과]	조선산업특구계획 변경 9
〃	고성군 도시가스(LNG) 공급 12
[환 경 과]	율대농공단지 폐수종말처리시설설치 14
[녹지공원과]	남산 자생식물원 조성 16
[해양수산과]	어촌마을 권역단위 종합정비사업 18
〃	남포 국가어항 개발사업 20
[주택도시과]	도시계획도로 개설사업 22
〃	회화ㆍ거류면소재지 종합정비사업 24
[건설교통과]	영오면소재지 종합정비사업 26
〃	마동지구 다목적 농촌용수 개발사업 28
〃	당동~내곡간 군도 건설사업 30
〃	지방도1010호선(한내~덕곡) 확ㆍ포장 32
〃	국도14호선(고성 죽계~마산 진전) 확ㆍ포장 34
〃	국도77호선(고성~통영) 확ㆍ포장 36
[안전총괄과]	고성천 고향의 강 조성사업 38
[농업정책과]	농업기술센터 신축 이전 40
[생명환경농업과]	경축순환자원화센터 건립 42
[관광지사업소]	남해안 관광클러스터 개발사업 44
〃	당항포 해양마리나시설 조성 46
[상하수도사업소]	영오ㆍ하일지방상수도 확장사업 48
〃	동해지방상수도 확장사업 50

	기획감사실

고성화력발전소 건설

□ 제6차 정부 전력수급기본계획에 따라 하이면 덕호리 일원에 고성 화력발전소를 유치하여 건설토록 함으로써,

□ 발전소주변지역 지원사업을 확대하고 지역경제 활성화와 지방재정 확충에 기여하고자 함.

사업개요

□ 위    치 : 하이면 덕호리 일원(약 110만㎡)

□ 사업기간 : 2015. 9. ~ 2019. 12.

□ 사 업 자 : 고성그린파워(주) [한국남동발전㈜, SK건설㈜]

□ 사업내용 : 2,000㎿(1,000㎿ × 2기)

□ 사 업 비 : 약 4조원(민자)

추진상황 및 향후계획

□ 2013.  2. 25. : 제6차 전력수급기본계획 확정(지식경제부)

□ 2013.  4. 30. : 발전사업 허가(산업자원통상부 → SK건설)

□ 2013.  7. 24. : 고성군지역대책위원회 발족(위촉 15, 임명 5)

□ 2013.  8.  6. : 남동발전 및 SK건설 실무자회의 참석(남동발전본부)

⇒ ‘고성’ 명칭사용 확답

□ 2013. 12. 27. : 환경영향평가(초안) 설명회 개최(하이면복지회관)

□ 2013.  7. ~ 2014. 6. : 고성화력발전소 지역대책위원회 개최 4회

□ 2014.  6. 27. : SPC 설립등기

□ 2014.  8.     : 지원시책 발굴조사를 위한 선진 발전소 견학

□ 2014.  8.     : 환경영향평가(초안) 주민공청회 개최

□ 2014. 10.     : 전원개발사업 실시계획 승인신청

□ 2015.  9. ~ 2019. 12. : 공사착공 및 준공

문제점 및 대책

□ 숙소 및 사원아파트와 이주단지 등 조성에 따른 부지확보 애로  (약 32만㎡)

⇒ 주택도시과, 하이면 주민대책위원회의 업무 협조로 조성부지 확보 및 사업추진

조감도

	교육복지과

기숙형중학교 건립 및 진입도로 개설공사

사업개요

□ 사업위치 : 삼산면 삼봉리 산76-2번지 일원

□ 사업면적 : 학교 47,667㎡ (※연면적: 9,852㎡, 지상 3층)

□ 학교규모 : 7학급(특수 1학급 포함), 학생수 최대 150명

□ 개교예정 : 2016. 3. 1.

□ 사 업 비 : 241억원(국비)

□ 시 행 처 : 경상남도교육청

※ 기숙형중학교 진입도로 개설공사(군시행)

□ 사 업 량 : 도로개설 L=327m, B=10m / 교량설치 L=16m, B=10m

□ 소요예산 : 1,583백만원(토지매입 395 /  공사비 1,188)

□ 추진상황

- 2013. 3. 26. : 기숙형중학교 설립  행정지원단 구성

- 2013. 8.  5. : 기숙형중학교 기반시설 지원 계획 수립

- 2014. 3.  3. ~ 현재 : 편입토지 감정평가 및 보상협의(19필지, 3,102㎡)

추진상황 및 향후계획

□ 2012.  4. 16. : 교육여건 개선을 위한 적정규모학교 육성 계획수립

□ 2012.  7. 26. : 기숙형중학교 설립여부 학부모 설문조사 실시(3개면)

□ 2012.  8.  1. : 기숙형 중학교 설립 확정(94.8% 찬성)

□ 2013.  2.  4. : 중앙 투ㆍ융자 심사결과(적정) 설립확정

□ 2013. 11.  5. : 기숙형중학교 설계용역 기본배치계획(안) 확정

□ 2014.  3. 21. : 기숙형중학교 고성군관리계획 심의(원안가결)

□ 2014.  6. 16. : 실시계획인가(진입도로 개설공사) 확정 공고

□ 2014.  7.  4. : 기숙형중학교 건립 및 진입도로 개설공사 착공

□ 2016.  2.    : 기숙형중학교 건립 및 진입도로 개설공사 완공

□ 2016.  3.    : 기숙형중학교 개교(예정)

대상지 현황도 및 배치계획

□ 대상지 현황

- 동측은 농지이며, 인근에 삼봉천 흐르고 있고, 남측은 상촌마을이 있음

- 북서방향으로 경사가 약50m 내외로 점점 높아지는 산지 지형이며, 평균경사 19°

- 진입도로 예정지는 대부분 현황도로로, 표고가 20m이하로 분포, 경사가 없는 낮은 지대임

□ 조감도

	문화관광체육과

수남유수지 생태공원 조성사업

□ 남산공원과 연계한 생태 및 도심공원 조성으로 쾌적한 도시환경 도모

□ 자연적인 습지와 갈대숲을 활용한 관광자원화 및 생태체험 학습공간 조성

추진개요(현황)

□ 위    치 : 고성읍 수남리 511-2번지 일원

□ 사업기간 : 2012. ~ 2014.(3년간)

□ 사 업 량 : 친환경 생태공원 조성(A=133,365㎡)

- 생태탐방로, 동심원, 연꽃단지 및 수생식물원, 주차장, 화장실 등

□ 총사업비 : 4,180백만원(※ 토지매입 및 기타 : 4,961백만원)

- 연도별 소요예산

구 분	계	2012	2013	2014	비고
계	4,180	400	1,600	2,180
국 비	2,090	200	800	1,090
도 비	627	60	240	327
시군비	1,463	140	560	763

추진상황

□ 2009. 1. : 수변공원 지정 고시(경상남도 2009-4호)

□ 2009. 4.∼ : 보상협의 및 부지매입

□ 2009.10. : 지방재정 투ㆍ융자 재심사(경상남도)

□ 2012. 6. : 생태공원 조성사업 실시계획 인가 및 사업 착공(1차분)

□ 2013. 5. : 국유지(기재부, 10,349㎡) 매입 및 실시계획 인가(변경)

□ 2013. 5. : 생태공원 조성사업 (1차분) 준공 및 (2차분) 착공

□ 2013. 9. : 경남도교육청 소유부지(37,096㎡) 무상사용허가(협의)

□ 2014. 6. : 생태공원 조성사업 (3차분) 착공

향후계획

□ 2014.08. : 폐기물처리 용역 발주

□ 2014.09. : 건축공사(화장실) 발주

□ 2014.12. : 생태공원 조성사업 (총괄분) 준공 예정

문제점 및 대책

□ 연차사업(2012 ~ 2014)으로 기 보상된 지장물의 대체부지 미확보로

공사추진 애로

⇒ 계속 철거 이전 독려

□ 지장물 철거 이전과 동시에 폐기물(콘크리트 및 폐화석 등) 발생 예상

⇒ 지장물 조속한 이전 촉구 및 폐기물처리 용역 발주

□ 고성군 하수도 정비 중점 관리지역의 용역중인 사업

⇒ 펌핑장 설치 장소의 사업구역 중첩으로 협의 후 제외 조치

위 치 도

조 감 도

	특구경제과

고성조선산업특구계획 변경

단순 노동집약적 중ㆍ소형 선박 및 조선기자재 생산에서 고부가 해양플랜트 설비 생산 작업장 확보를 위한 특구계획 변경에 대한 행정지원으로 지속적인 성장 도모

추진개요

□ 위    치 : 고성군 동해면 일원 3개지구(내산, 장좌, 양촌ㆍ용정)

□ 명    칭 : 조선산업특구 → 조선해양산업특구

□ 면    적 : 2,651,711㎡ → 3,884,176㎡(1,232,465㎡)

구 분		계	육 지 부	공유수면매립부	공유수면점․사용
합 계	기 정	2,651,711	1,372,036	936,849	342,826
	증 감	1,232,465	16,212	206,778	1,009,475
	변 경	3,884,176	1,388,248	1,143,627	1,352,301
내산 지구	기 정	223,318	192,243	-	31,075
	증 감	227,616	1,301	77,365	148,950
	변 경	450,934	193,544	77,365	180,025
장좌 지구	기 정	507,901	447,805	-	60,096
	증 감	1,004,849	14,911	129,413	860,525
	변 경	1,512,750	462,716	129,413	920,621
양촌ㆍ용정지구		1,920,492	731,988	936,849	251,655

□ 사업기간 : 2007년~2015년 → 2007년~2018년(증 3년)

□ 사 업 비 : 6,048억원 → 7,952억원(증 1,904억원)

□ 사업내용 : 조선기자재 및 해양플랜트 설비생산, 대형ㆍ특수선박건조 등

□ 특화사업자 : 삼강엠앤티㈜, 고성조선해양㈜, 삼호조선해양㈜

추진상황 및 향후계획

※ 조선산업특구 지정

□ 2007.  7. 25. : 조선산업 특구지정 고시(지식경제부)

□ 2007.  8. 28. : 경남도/고성군/특화사업자간 이행협약(MOA) 체결

□ 2009.  3. ~  : 조선산업특구(내산지구,장좌지구)내 공장가동 중

□ 2010.  4.  1. : 장좌지구 일반산업단지계획 승인ㆍ고시

□ 2010. 10. 28. : 내산지구 일반산업단지계획 변경 승인․고시

□ 2012.  6.  1. : 내산, 장좌지구 공유수면매립 준공(경남도)

□ 2012. 12. 24. : 조선산업특구 기간변경 승인(지식경제부 고시 제2012-527호)

☞ 당초 : 2007 ~ 2012년 → 변경 : 2007 ~ 2015년

※ 조선해양산업특구계획 변경

□ 2013.  4. 17. : 조선산업특구 특구계획(변경) 제안서 접수

□ 2013.  4. 29. : 주민 열람 공고(열람기간 : 5. 6 ~ 5. 24)

□ 2013.  5. 16. : 주민설명회 및 공청회 개최

□ 2013.  7. 11. : 고성군 관련부서(기관) 협의 완료

□ 2013. 10. 23. : 군의회 의견청취

□ 2013. 11.  8. : 고성군계획위원회 토지이용계획 심의(원안가결)

□ 2013. 12. 20. : 특구계획 변경 신청(고성군→중소기업청)

□ 2014.  1.  9. : 중앙행정기관 협의(해양수산부, 환경부, 등)

□ 2014.  3.  6. : 수산자원보호구역 해제 협의 완료(해양수산부)

□ 2014.  4. 15. : 전략환경영향평가 협의 완료(환경부)

□ 2014.  4. 15. : 매립기본계획 반영 요청(해양수산부 연안계획과)

□ 2014.  4. 25. : 매립기본계획 관련 행정기관 협의

□ 2014.  5. 29. : 중앙도시계획위원회 심의

□ 2014.  6. 19. : 특구 변경 협의의견에 대한 조치계획서 제출

□ 2014.  7. 22. : 중앙연안관리심의회 심의

□ 2014.  8.    : 매립기본계획 변경 고시

□ 2014.  9.    : 특구위원회 심의 및 특구계획 변경 승인 고시

□ 2015.  8.    : 일반산업단지계획 변경 승인 및 공사 착공

□ 2018. 12.    : 조선해양산업특구 준공

기대효과

□ 고용창출로 인한 인구증가와 지역경제 활성화

문제점 및 대책

□ 조선산업특구 계획변경과 같이 추진중인 공유수면매립 기본계획 변경은 해양수산부 중앙연안관리심의회 개최시 해양환경 보존을 이유로 심의에 어려움 예상

⇒ 중소기업청(지역특구과)과 유기적 협조체계로 특구 변경 타당성 제시와 공유수면매립 기본계획 반영을 위한 대책 강구

위 치 도

조 감 도

	특구경제과

고성군 도시가스(LNG)공급

□ 아파트 및 주택, 농공단지 등 도시가스 수요 대비 및 확대 공급

□ 도시가스 공급으로 주민가계 안정도모

추진개요

□ 사 업 명 : 고성군 도시가스(LNG) 공급사업

□ 사업기간 : 2010. ~ 2019.

□ 사 업 비 : 10,901백만원(고성군 2,208)

□ 사 업 량 : 중ㆍ저압배관 19.5km(고성읍 지역)

□ 사업계획                                                     (단위 :백만원)

구 분	1~2년차	3년차	4년차	5년차 (2014년)	6년차 이후	합 계
총투자비	2,514	1,105	1,479	1,931	3,872	10,901
고성군	100	470	819	819	-	2,208
경남에너지	2,414	635	660	1,112	3,872	8,693

추진상황 및 향후계획

□ 2008. 12. 30 : 지식경제부 제9차 장기 천연가스 수급계획에 따라 2010년도 도시가스 공급지역으로 고성군 포함

□ 2010.  9. 27 : 도시가스공급사업 보조금지급에 관한 조례 제정

□ 2010. 12.  9 : 고성군 도시가스 공급 이행협약서(MOU) 체결

□ 2010. 12. 20 : 고성군 도시가스 공급(동외주공아파트 등)

□ 2011.  8. 22 : 동외리 동외광장 주변 주배관설치 공사(380m)

□ 2012.  5. 31 : 정동삼거리~고성오피스텔(265m)중ㆍ저압배관 설치

□ 2012.  6. 25 : 동외리 동외광장~무지개아파트(400m)저압배관 설치

□ 2012.  7. 20 : 무지개아파트~고성경찰서(500m)저압배관 설치

□ 2012. 11. 10 : 고성오피스텔~동외리 동외광장(435m)중ㆍ저압배관 설치

□ 2012. 11. 10 : 무지개아파트~DS아이존빌 2차(500m)저압배관 설치

□ 2013.  8.  1 : 서외오거리 ~ 공설운동장 주위(660m)주배관 설치

□ 2013.  8.  1 : 동외리 동외광장 ~서외오거리 주위(417m) 주배관 설치

□ 2013.  9.  4 : 동외리 동외광장 및 고성군청 주변(879m) 저압배관 설치

□ 2013. 12. 15 : 설치 완료 및 2,051세대 공급

□ 2014.  4. 17 : 관로매설에 따른 도로굴착 심의

□ 2014.  7.    : 교사리 공설운동장~경남항공고(1,940m) 중압배관 설치

□ 2014.  8.    : 동외리 우성숯불갈비~고성중앙고(1,250m) 저압배관 설치

□ 2014.  9.    : 세대 공급계획 (고성중앙고 주변, 교사삼거리 주변)

기대효과

□ 청정한 도시가스(LNG)공급으로 주민 가계부담 경감

□ 안전하고 쾌적한 도시가스 공급으로 군민의 생활 편익 증진

도시가스 공급 배관도

	환 경 과

율대농공단지 폐수종말처리시설설치

□ 시설노후화에 따른 안전성 저하로 설치(개선) 필요성 대두

□ 배출허용기준 강화에 따른 시설 개선 요구

사업개요

□ 위    치 : 고성읍 율대리 149-12번지 일원

□ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2015 6.

□ 시설용량 : 1,000톤/일

□ 총사업비 : 9,353백만원(국비 4,660 / 군비 2,406 / 원인자 2,287)

구 분	계	기투자	2014년	비 고
계	9,353	3,364	5,989
국 비	4,660	1,464	3,196
군 비	2,406	1,900	506
원인자부담	2,287	-	2,287

추진사항 및 향후계획

□ 2012.  2. 24. : 기본계획 실시설계 용역

□ 2012.  5. 14. : 공법선정(HANT,  현대엔지니어링)

□ 2012. 11. 12. : 기본계획 변경(승인)-율대농공단지(제일리버스 포함)

□ 2013.  6. 10. : 도 계약심사 완료(설계)

□ 2014.  7. ~  : 토목 및 전기공사 진행 중(토목공사 공정률 80%)

□ 2014. 12.    : 공사완료

□ 2015.  1.    : 시운전 실시

□ 2015.  6.    : 준공

기대효과

□ 고농도 폐수의 적정처리로 당항만 등 주변 수질 개선

문제점 및 대책

□ 입주업체 부담분인 건축시설 및 전처리시설 설치공사 지연으로 전체 공사 부진

⇒ 관계법령에 따른 행정조치 및 공사 진행 촉구 중

현황도

	녹지공원과

남산 자생식물원 조성

도시근린공원인 남산공원을 자생식물원으로 재조성하여 학생들의 자연체험 학습장 활용과 군민 건강지킴이 공원으로 조성

추진개요(현황)

□ 위    치 : 남산공원 내

□ 사업기간 : 2012. ~ 2014.(3년간)

□ 사 업 량 : 100,000㎡(재정비 31,100㎡, 자연녹지 68,900㎡)

□ 연차별 투자계획                                  (단위 : 천원)

구 분	총사업비	기 투자액	2014	부담율
계	1,500,000	1,000,000	500,000
국 비	750,000	500,000	250,000	50%
도 비	225,000	150,000	75,000	15%
군 비	525,000	350,000	175,000	35%

추진상황 및 향후계획

□ 추진상황

- 2013. 9. 13. : 사업시행 전 계약심사 완료(경상남도 회계과)

- 2013. 9. 25. : 남산 자생식물원 조성사업 1차 발주

- 2014. 5.  2. : 남산 자생식물원 조성사업 2차 발주

- 2014. 6. 30. : 남산 자생식물원 조성사업 1차 준공

※ 2014. 6. 30.현재 전체 공정률 90%

- 2014.  9.     : 사업완료

기대효과

□ 주변 자연경관과 자생식물원 테마별 조성으로 산림문화 공간 활용

□ 남산ㆍ오토캠핑장ㆍ수남유수지와 연계로 사계절 관광시너지 효과

□ 학생 자연체험 학습장 및 군민 쉼터 활용

조감도

	해양수산과

어촌마을 권역단위 종합정비사업

동질성을 가진 2~3개 마을을 권역화하여 지역 특성에 맞는 경관개선 환경정비 및 주민역량강화 등을 통한 지역주민의 삶의 질 향상

추진개요

□ 사업권역 : 2개 권역

① 수남ㆍ거운 권역 [사업기간 : 2012. 1. ~ 2016. 12.(5년)]

ㆍ2014년도 사업 : 해상교량, 투명보트체험장, 마을공동 주차장 조성

② 자란만 권역 [사업기간 : 2013. 1. ~ 2017. 12.(5년)]

ㆍ2014년도 사업 : 실시설계, 선착장 접안시설, 어촌체험종합안내소 리모델링

□ 사업비 현황

(단위 : 천원)

권 역 명	위 치	총사업비	년도별 사업비				비고
			2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2개 사업	10,250,000	630,000	2,924,400	2,770,000	3,925,600	광특 70% 도비 9% 군비 21%
수남ㆍ거운	고성읍 수남리, 신월리, 월평리	5,250,000	630,000	2,243,000	1,071,000	1,306,000
자 란 만	하일면 동화ㆍ춘암리 하이면 덕명리	5,000,000	0	681,400	1,699,000	2,619,600

추진상황 및 향후계획

① 수남․거운권역 종합정비사업

- 2014. 7. : 다목적어업지원시설 리모델링 완료 및 사용승인

- 2014. 7. : 해상교량, 공용주차장, 투명보트 체험장 착공(준공 12월)

② 자란만권역 종합정비사업

- 2014. 7. : 세부실시설계 준공 및 시행계획 승인

- 2014. 8. : 선착장 접안시설, 주차장포장, CCTV 및 가로등 설치, 개막이 체험장 착공(12월 준공예정)

기대효과

□ 지역의 잠재자원을 특성화하여 어업외 소득증대에 기여

□ 어업인 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

조감도

□ 수남ㆍ거운권역

□ 자란만권역

	해양수산과

남포 국가어항 개발사업

남포 국가어항을 어항기능시설과 함께 물류, 관광, 레저 등 다기능의 복합어항 개발로 지역어업인의 소득증대 기여 및 휴식공간 제공

추진개요

□ 위    치 : 고성읍 수남리, 삼산면 판곡리 일원

□ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2018. 12월(6년)

□ 사 업 비 : 480억원 (국비 100%)

□ 사업내용

- 어항시설 → 호안270m, 방파제150m, 준설88,623㎥, 물량장305m

- 복합시설 → 문화복지시설, 물류시설, 친수공간 등

추진상황 및 향후계획

□ 2014.  7. : 환경영향평가 협의 완료

□ 2014.  8. : 사업착공

- 사 업 비 : 20억원 (국비)

- 사업내용 : 매립토 투기장 조성

□ 2014. 12. : 2014년도분 준공예정

기대효과

□ 어항, 유통, 가공, 관광 등의 복합어항 개발로 지역경제 활성화 기여

□ 어항중심의 해양관광 인프라 구축으로 군민의 휴식공간 제공 및 삶의 질 향상

전경사진

조감도

	주택도시과

도시계획도로 개설사업

도시계획도로 개설로 교통 불편을 해소하고 지역개발 촉진과

지역경제 활성화 도모

추진개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	총계획		기투자		2014년		2015년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		35,365		8,005		6,470		20,890
당동도시계획도로 (대로3-3호)개설공사	L=1.5km B=20m	21,150	도로개설 (L=364m) 및 보상 1식	4,460	도로개설 (L=230m) 및 보상 1식	1,000	도로개설 (L=906m) 및 보상 1식	15,690
송학광장~교사삼거리간 도시계획도로 (중로1-5호) 개설공사	L=920m B=20m	8,300	실시설계 용역비	100	도로개설 (L=480m) 및 보상 1식	3,500	도로개설 및 보상 1식	4,700
남포항주변 도시계획도로 (대로3-2호)개설공사	L=274m B=25m	2,026	도로개설 및 보상 1식	2,026	도로개설 및 보상 1식	-
철성초교앞 도시계획도로 (소로1-7호)개설공사	L=243m B=10m	1,019	도로개설 및 보상 1식	1,019	도로개설 및 보상 1식	-
동외광장 주변 도시계획도로 (소로2-29호)개설공사	L=40m B=8m	350	-	-	도로개설 및 보상 1식	350
남산주변 도시계획도로 (소로2-56호)개설공사	L=50m B=8m	220	-	-	도로개설 및 보상 1식	220
서외오거리 교통개선사업	교차로 설치 1식	550	실시설계 용역비	50	회전교차로 설치 및 보상	500	-	-
송학광장~전통시장간 도시계획도로 (소로1-6호)개설공사	L=161m B=8m	650	-	-	도로개설 및 보상1식	650	-	-
도시계획구역내 도로정비공사	유지관리 1식	1,100	유지관리 1식	350	유지관리 1식	250	유지관리 1식	500

추진상황 및 향후계획

□ 2014.  4. : 철성초교 앞 도시계획도로(소로1-7호)개설공사 착공

□ 2014.  5. : 당동도시계획도로(대로3-3호)개설공사 손실보상협의

□ 2014.  5. : 송학광장~교사삼거리간(중로1-5호) 손실보상 협의

□ 2014.  5. : 송학광장~전통시장간(소로1-6호) 손실보상 협의

□ 2014.  6. : 남포항주변 도시계획도로(대로3-2호)개설공사 착공

□ 2014.  6. : 동외광장주변 도시계획도로(소로2-29호)개설공사

실시설계 및 분할측량 완료

□ 2014.  6. : 남산주변 도시계획도로(소로2-56호) 개설공사

분할측량 및 감정평가 시행

□ 2014.  7. : 서외오거리 교통개선사업 착공

□ 2014. 12. : 송학광장~전통시장간(소로1-6호) 도시계획도로 개설공사 착공

기대효과

□ 주택밀집지 주변 정비로 쾌적한 도시환경조성은 물론 원활한 교통소통과 지역 간 균형발전으로 주민생활 편익제공

	주택도시과

회화ㆍ거류면소재지 종합정비사업

회화ㆍ거류면 소재지인 배둔리, 당동리 일원에 대해 생활편익, 문화ㆍ복지시설 등 농촌지역의 종합적인 생활환경 개선 및 정주공간 정비를 통한 지역 거점 기능 강화로 주민 삶의 질 향상과 지역발전 도모

추진개요

□ 회화면소재지 종합정비사업

- 위    치 : 회화면 배둔리

- 사업기간 : 2012. ~ 2015.(4년간)

- 사업개요

ㆍⅠ단계사업 : 관인마을 도시계획도로, 복지회관리모델링, 배둔시장 주변 환경정비

ㆍⅡ단계사업 : 공룡공원조성, 공룡공원 주차장조성, 공룡공원내 도시계획도로, 방화산등산로정비

- 사 업 비 : 9,800백만원(국비 70%, 도비 10%, 군비 20%)

□ 거류면소재지 종합정비사업

- 위    치 : 거류면 당동리

- 사업기간 : 2013. ~ 2016.(4년간)

- 사업개요 : 도시계획도로정비, 마을공동주차장, 다목적복지센터, 다목적광장조성, 등산로정비, 마을안길정비 등

- 사 업 비 : 7,000백만원(국비 70%, 도비 10%, 군비 20%)

추진상황 및 향후계획

□ 2013. 9. : 회화면소재지 종합정비사업 착공(1단계)

□ 2014. 5. : 거류면소재지 종합정비사업 기본계획수립 완료

□ 2014.10. : 거류면소재지 종합정비사업 시행계획 승인 및 착공

기대효과

□ 읍면소재지에 대한 기반조성 및 정비를 통한 지역 중심거점으로의 기능강화로 생동감 넘치는 소재지 조성

조감도

□ 회화면소재지

□ 거류면소재지

	건설교통과

영오면소재지 종합정비사업

□ 고성 북부 중심지 영오면소재지 경제ㆍ사회ㆍ문화적 거점도시로 육성

□ 근교농업 중심지의 거점 개발을 통한 지역간 균형발전 도모

추진개요(현황)

□ 사업구분 : 국고보조사업(광특)

□ 위    치 : 영오면 양산리, 성곡리, 연당리 일원

□ 사업기간 : 2014. ~ 2017.(4년간)

□ 사 업 량

- 기초생활기반확충 : 마을진입도확장, 공동주차장, 다목적복지회관 등

- 지역경관개선 : 생태하천정비, 생태공원조성, 산책로 조성 등

- 지역역량강화 : 지역리더양성교육, 선진지견학 등

□ 사 업 비 : 7,000백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

□ 투자계획

구 분	합 계		2014 계획		2015 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	기초생활기반확충 지역경관개선 지역역량강화	7,000	기본ㆍ실시설계 각종행정협의	450	기초생활기반확충 지역경관개선 지역역량강화	6,550
국 비		4,900		315		4,585
도 비		630		40		590
군 비		1,470		95		1,375

추진상황 및 향후계획

□ 2013.  2. 22 : 사업타당성검토 및 공모 신청(경상남도)

□ 2013.  4. 20 : 신규사업 계획 종합검토(농림축산식품부)

□ 2013.  9.    : 사업타당성검토 결과 확정

□ 2014.  1. ~ 10. : 기본계획 수립

□ 2014. 10. ~ 2015.  3. : 실시설계 및 편입토지 보상협의

□ 2015.  4. ~ 2017. 12. : 사업착공 및 준공

기대효과

□ 영오면소재지를 경제ㆍ사회ㆍ문화적 거점기능을 갖춘 지역으로 육성, 지역간 균형발전 도모

조감도

	건설교통과

마동지구 다목적 농촌용수 개발사업

□ 수자원확보(741만톤)로 상습한해 피해방지 및 상습침수지 개선(147㏊)

□ 육운개선(거리단축 9.1㎞) 및 농업수익증대, 농촌환경개선, 관광권조성 등

사업개요

□ 보조구분 : 국가직접시행

□ 위    치 : 고성읍, 마암, 동해, 거류, 구만, 회화면

□ 사업기간 : 2002. ~ 2017.(16년간)

□ 사 업 량 : 개발면적 1,400㏊(신규 890㏊, 보강 510㏊)

□ 사 업 비 : 118,140백만원(국비 100%)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2013년 까지		2014년 시행		2015년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	배수갑문 및 방조제 1식	118,140	배수갑문, 물막이공사 진입도로, 문비공사	72,612	방조제완료 및 환배수	3,500	환배수로 용수로, 앙수장	42,028
국 비		118,140		72,612		3,500		42,028
지방비		-		-		-		-

추진상황 및 향후계획

□ 1995.  8. 21. : 기본조사 대상지구 결정 및 조사

□ 2001.  6. 14. : 마동지구 신규착수지구 선정(농림부)

□ 2002.  7. 26. : 공유수면 매립승인 및 시행인가

□ 2002. 12. 17. : 공사착공

□ 2013. 12. 31. : 진입도로, 배수갑문 및 방조제 물막이 공사완료(공정율 64%)

□ 2014. 12. 31. : 방조제공사 완료

□ 2015.  1. ~ 2015. 12. :  진입도로 및 환배수로 설치

전경사진

조감도

	건설교통과

당동~내곡간 군도 건설사업

조선산업특구 조성과 안정국가산업단지 물류수송을 위한 동해․거류면 지역의 새로운 간선도로망 구축

사업개요

□ 노선명 : 군도12호 (화당~내곡선)

□ 위  치 : 거류면 당동리 ~ 동해면 내곡리

□ 사업량 : L = 2.3㎞ , B = 2차로→4차로

□ 사업비 : 12,850백만원(도비 10,000 / 군비 2,850)

□ 추진 공정률 : 75%

추진사항 및 향후계획

(단위: 백만원)

구분	계		기투자		2014년		2015년 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		12,850		11,100		900	-	850
국비	도로확포장 L=2.3㎞ 보상1식	-	도로확장 (보상 및 구조물)	-	도로확장 (포 장) (교통신호기)	-	도로확장 (부대시설)	-
도비		10,000		10,000		-		-
군비		2,850		1,100		900		850

기대효과

□ 안정국가산업단지와 동해면 조선산업특구 도로교통 문제해소

□ 조선산업특구 조성으로 향후 급증하는 교통량 대비와 당동지역의 산업․주거 거점도시 육성을 위한 기반확충

위치도

전경사진

	건설교통과

지방도1010호선(한내~덕곡) 확ㆍ포장

조선산업특구 조성 및 안정국가산업단지 중ㆍ대형차량의 물류수송을 위한 새로운 간선도로망 구축 및 지역균형개발

사업개요

□ 사업구분 : 경상남도시행사업

□ 위    치 : 동해면 내곡리 한내 ~ 양촌리 덕곡

□ 사업기간 : 2012. ~ 2019.(7년간)

□ 사 업 량 : L=9.27㎞, B=20m(4차로)

□ 사 업 비 : 65,200백만원(도비 100%)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합 계		기 투 자		2014년		2015년 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=9.27㎞	65,200	설계용역 1식	1,000	공사착수 및 토지보상1식	1,000	토지보상1식 공사1식	63,200
국 비		-		-		-		-
도 비		65,200		1,000		1,000		63,200
군 비		-		-		-		-

추진상황 및 향후계획

□ 2011. 10 : 경상남도 지방재정투융자심사 완료

□ 2011.  4 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 2012. 12 : 노선관련 주민설명회 개최

□ 2013.  2 : 전략환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회

□ 2014. 10 : 기본 및 실시설계용역 완료계획

□ 2014. 12 : 보상시행계획 및 공사착수계획

□ 2019. 12 : 공사 준공계획

위치도

전경사진

	건설교통과

국도14호선(고성 죽계~마산 진전) 확ㆍ포장

□ 고성 ~ 창원 간 날로 증가하는 교통량 및 대형화로 교통 혼잡 극심

□ 불량 선형개량 및 차로 증설을 통하여 이용자의 안전성 확보

사업개요

□ 보조구분 : 국가직접시행

□ 위    치 : 고성읍 죽계리 ~ 창원시 마산합포구 진전면 오서리

□ 사업기간 : 2009. ~ 2020.(12년간)

□ 사 업 량 : L=17.7㎞, B=19.5~26.5m (4차로 시설개량)

□ 사 업 비 : 266,400백만원(국비 100%)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2013년 까지		2014년 시행		2015년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로 확포장 L=17.7㎞	266,400	실시설계	7,500	공사착수	10,000	토지보상 공사시행	248,900
국 비		266,400		7,500		10,000		248,900
지방비		-		-		-		-

추진상황 및 향후계획

□ 2006.  8. : 사업타당성 조사 완료

□ 2010.  3. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 2013. 10. : 총사업비 변경 협의 완료

□ 2014.  4. : 공사착수 및 보상시행

□ 2020.  9. : 공사준공계획

위치도

	건설교통과

국도77호선(고성 ~ 통영) 확ㆍ포장

□ 조선산업특구 조성 및 안정국가산업단지의 원활한 물동량 수송

□ 기존도로 굴곡과다와 노폭협소로 교통사고 위험 상존

사업개요

□ 보조구분 : 국가직접시행

□ 위    치 : 동해면 장좌리 ~ 통영시 광도면 노산리

□ 사업기간 : 2011. ~ 2019.(9년간)

□ 사 업 량 : L=19.2㎞(1구간 7.8㎞, 2구간 11.4㎞), B=11.5~19m(4차로)

□ 사 업 비 : 188,000백만원(국비 100%)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2013년 까지		2014년 시행		2015년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로 확포장 L=19.2㎞	188,000	기본설계	3,040	실시설계 공사착수	500	토지보상 공사시행	184,460
국 비		188,000		3,040		500		184,460
지방비		-		-		-		-

추진상황 및 향후계획

□ 2008.  7. : 예비타당성 조사 완료

□ 2011.  2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 2012.  8. : 전략환경영향평가 및 주민설명회 개최

□ 2014.  8. : 총사업비 변경협의(기획재정부) 및 설계용역 완료계획

□ 2014. 10. ~ 2019. 10. : 공사시행 및 준공계획

위치도

	안전총괄과

고성천 고향의 강 조성사업

❍ 치수와 이수가 조화된 자연친화적 하천정비로 재해사전 예방

❍ 지역의 역사와 문화, 생태기능이 연계된 다양한 친수공간 확보

추진개요

❍ 위    치 : 고성읍 죽계리 ~ 고성읍 무량리 일원

❍ 사업기간 : 2013. ~ 2017.

❍ 사 업 량 : 고향의 강 조성 L=5.4㎞

❍ 사 업 비 : 18,432백만원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%)

❍ 투자계획                                         (단위 : 천원)

구분	합 계		2013년		2014년		2015년 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	L=5.4㎞	18,431,667	실시설계	833,333	설계 및 보상	789,333	보상 및 공사	16,809,001
국비		11,059,000		500,000		473,600		10,085,400
도비		2,211,800		100,000		94,720		2,017,080
군비		5,160,867		233,333		221,013		4,706,521

추진상황 및 향후계획

❍ 2013.  1. : 용역 계약심사 완료(경상남도)

❍ 2013.  4. : 하천기본계획(변경) 및 실시설계 용역 착수

❍ 2013.  9. : 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 착수

❍ 2014.  3. : 주민설명회 개최

❍ 2014.  3. : 군의회 보고회 개최

❍ 2014. 11. : 총사업비 협의(경상남도, 부산지방국토관리청)

❍ 2014. 11. : 편입토지 등 보상 협의

❍ 2015.  2. : 공사 착공

기대효과

❍ 고향의 강 조성사업을 통한 다양한 친수공간 확보와 치수기능 개선으로 재해사전 예방 및 지역 주민의 정주여건 향상

위치도

전경사진

	농업정책과

농업기술센터 신축 이전

도심지에 위치한 농업기술센터를 신축 이전하여 연구시설 부족 및 실습포장 부재 해소로 특화작목 연구 등 첨단 농업 기술 보급에 기여

추진개요(현황)

□ 위    치 : 고성읍 우산리 230-10번지 일원

□ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2014. 12.

□ 규    모 : 84,232㎡(건물부지 39,176 / 실습포장 45,056)

□ 사 업 비 : 19,326백만원(광특 6,523 /  도비 434 / 군비 12,369)

□ 사업내용                                    (단위 : 백만원, ㎡)

구분		계	센 터 본관및교육장 (2층)	부 지 (토 목) 조 성 주차장등	일 반 창 고	실 증 시험포유 리 온 실	실 증 시험포비 닐 온 실	체험 전시 시설	과학영농시설			소공원	지도 장비 구입	농기계교육장	부 지 매입비
									소계	미생물배양시설	실습 포장
연면적			2,912	35,243	521	2,244	2,383	165	3식	563	45,056	3,950	8종	400	84,232
사업비	계	19,326	5,000	2,900	400	1,000	400	340	2,600	1,900	700	500	306	400	5,480
	광특	6,523	2,500	1,450	200	500	-	170	1,300	950	350	250	153	-	-
	도비	434	-	-	-	-	200	34	-	-	-	-	-	200	-
	군비	12,369	2,500	1,450	200	500	200	136	1,300	950	350	250	153	200	5,480

추진상황 및 향후계획

□ 2013. 5. : 고성군계획시설(농업기술센터) 실시계획 인가 고시(41,690㎡)

□ 2013. 6. : 센터이전부지 농업진흥지역 해제고시(41,690㎡)

□ 2013. 9. : 공사착공(센터본관, 일반창고, 임대농기계보관창고, 천연자재제조보관창고)

□ 2013.11. : 공사착공(센터조성공사, 농업체험전시시설)

□ 2014. 1. : 공사착공(농기계교육장, 비닐온실)

□ 2014. 3. : 공사준공(일반창고, 임대농기계보관창고, 천연자재제조보관창고)

□ 2014. 5. : 공사착공(미생물배양시설)

□ 2014. 6. : 공사착공(센터 진입도로, 농작물 실증포장, 과수시험포장)

□ 2014. 7. : 공사준공(센터본관, 농기계교육장, 비닐온실), 공사착공(유리온실)

□ 2014. 8. : 공사착공(빗물재활용시설)

□ 2014.10. : 공사준공(센터부지 조성공사, 농업체험전시시설, 미생물배양시설, 센터 진입도로,

농작물 실증포장, 과수시험포장, 유리온실, 빗물재활용시설)

□ 2014.11. : 각종 부대시설 공사완료 후 이전

기대효과

□ 첨단 농업시설 및 기능을 보유한 농업기술센터로 탈바꿈

□ 지역특화작목 시험․연구를 위한 연구기능 보강으로 첨단농업기술 보급

□ 어메니티 휴식공간 조성으로 도시민의 농업ㆍ농촌체험장으로 활용

	생명환경농업과

경축순환자원화센터 건립

□ 경종과 축산을 연계한 자원순환형농업 추진

ㆍ가축사양 → 양질의 퇴비 → 지력증진 → 안전농산물 생산

사업개요

□ 사 업 자 : 동고성농업협동조합(대표 이영갑)

□ 사업위치 : 마암면 삼락리 산261번지외 1필지

□ 사업기간 : 2010. ~ 2014.

□ 사 업 량 : 경축순환자원화시설 1식(퇴비화시설 4,557㎡, 기계장비 7종)

□ 사 업 비 : 5,812백만원(광특 2,642 / 도비 655 / 군비 1,459 / 자담 1,056)

추진상황

□ 2013. 7. : 부지확보(12,412㎡)

□ 2013. 11. ~ 12. : 건축 인ㆍ허가 처리 완료

□ 2014.  4. : 부지 조성공사 완료 및 건축물 착공

□ 2014.  7월 현재 : 현 공정 40%

- 1층 : 포장실 및 후속식 발효조 시공완료

- 2층 : 비료 발효조 바닥공사 중

향후계획

□ 2014.  9. : 건축공사 완료

□ 2014. 10. : 기계설비 완료

□ 2014. 10. ~ 12. : 시범가동

경축순환자원화센터 진․출입로 확․포장공사

□ 사업기간 : 2013. 11. 19. ~ 2014. 9. 13.

□ 사 업 량

- 도로 확ㆍ포장 1식 (L=350.5M, B=5.0M)

- 가ㆍ감속 차선 1식 (L= 94.5M, B=4.5M)

□ 사 업 비 : 650백만원

□ 추진상황

- 2013. 11. 15. : 계약체결〔(주)인주종합건설〕

- 2013. 11. 19. : 공사착공

- 2014. 7. 현재 : 80%

☞ 도로 확장 및 보강토 옹벽공사 완료

☞ 가감차선 확장공사 중

위치도

	관광지사업소

남해안 관광클러스터 개발사업

주5일 근무제 정착과 교통 여건 개선 등 주변 환경변화에 따른 관광수요 증가에 대비 타 지역과 차별화된 관광지 연출로 남해안 관광산업의 구심 역할 강화

사업개요

□ 위    치 : 회화면 봉동리 일원

□  사업기간 : 2013. ~ 2017.(5년간)

□ 사업내용

- 당항포관광수련원 A=5,000㎡(4층, 250여명수용)

- 수변휴게공간조성 1식

□ 총사업비 : 12,262백만원(국비 6,131 / 도비 1,839 / 군비 4,292)

구분	총 액		2013년도		2014년도		2015년도
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	당항포관광 수련원 A=5,000㎡ 수변휴게 공간조성1식	12,262	실시설계 용역 1식	800	당항포관광 수련원 A=5,000㎡ 수변휴게 공간조성1식	2,000	당항포관광 수련원 A=5,000㎡ 수변휴게 공간조성1식	9,462
국 비		6,131		400		1,000		4,731
도 비		1,839		120		300		1,419
군 비		4,292		280		700		3,312

추진상황 및 향후계획

□ 2014.  2. : 관광수련원 현상공모 시행

□ 2014.  5. : 관광수련원 현상공모 완료

□ 2014.  5. : 수변공원 조성사업 실시설계 착수

□ 2014. 12. : 관광수련원 건립 및 수변공원 조성사업 실시설계 완료 및 착공

□ 2017. 12. : 남해안 관광클러스터개발사업 완료

기대효과

□ 관광객의 체류시간 연장으로 주변 관광시설 이용률 제고 및 지역경제 활성화 기여

위치도 및 조감도

□ 위치도

□ 조감도

	관광지사업소

당항포 해양마리나시설 조성

□ 국민소득 향상에 따른 해양레저관광 수요에 대비하고 남해안시대 핵심선도 사업이며, 고부가 가치 산업인 요트산업 육성

□ 마리나시설 기반구축으로 남해안 해양관광 선점 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

□ 위    치 : 회화면 당항만 일원(동촌항연접 당항포관광지수역)

□ 사업기간 : 2007. ~ 2014.(8년간)

□ 총사업비 : 9,800백만원

□ 주요 사업내용

- 호안 L=533ｍ, 매립 A=28,545㎡, 준설 A=23,849㎡,

- 부유식방파제 L=140ｍ, 부대공 1식

□ 투자계획

구 분	사 업 량		사 업 비(백만원)				비고
	사 업 내 용	규모	계	국비	도비	군비
계			9,800	5,200	135	4,465
기시행	ㆍ실시설계 및 행정절차 이행 ㆍ기반시설 조성	1식	9,197	4,900	135	4,162
2014년	ㆍ호안정비 : L=110m(피복석) ㆍ매립및준설 ㆍ상부콘크리트타설 : L=533m	1식	603	300	-	303

추진상황 및 향후계획

□ 2014.  3. : 사업착수 [상치콘크리트 및 호안정비(매립, 준설) 1식]

□ 2014.  8. : 사업준공

□ 2014. 12. : 확보부지(28,545㎡)에 대한 등기완료(고성군)

□ 당항포해양마리나시설 조성사업 추가사업비 확보(경남도, 해수부건의)

- 추가확보 사업비 : 44억원[광특회계(국비) 50%, 지방비 50%]

- 건의 및 방문기관 : 경남도 해양수산과, 해양수산부 해양정책실

- 사업내용 : 클럽하우스, 요트계류시설, 요트보관창고 등 부대시설

위치도 및 조감도

□ 위치도

□ 조감도

	상하수도사업소

영오ㆍ하일지방상수도 확장사업

□ 농어촌지역 급수 취약지역에 깨끗하고 안전한 상수도 공급

□ 낙후된 지역에 상수도 공급을 통한 지역민 정주 생활환경 개선 기여

추진개요(현황)

□ 사업 대상지 : 영오 외 6개면 일원(삼산, 하일, 상리, 대가, 영현, 영오, 개천면)

□ 사 업 기 간 : 2009. 12 ~ 2016. 12(계속사업)

□ 사 업 내 역

지구	사 업 량	사업비(백만원)				비고
		소계	2013까지	2014	2015이후
합계	ㆍ상수관로 L=125.9㎞ ㆍ배수지 2지 ㆍ가압장 3개소	21,600	14,223	2,500	4,877
영오	ㆍ상수관로 L=83.3㎞ ㆍ배수지 1지 ㆍ가압장 2개소	13,147	8,270	1,500	3,377	광특80% 군비20%
하일	ㆍ상수관로 L=42.5㎞ ㆍ배수지 1지 ㆍ가압장 1개소	8,453	5,953	1,000	1,500	광특80% 군비20%

추진상황 및 향후계획

□ 2009. 12. : 하일ㆍ영오지구 본선구간 관로부설 사업착공

□ 2013.  3. ~ 2014. 3. : 고봉(700톤),부포(1,600톤)배수지 2지 준공

□ 2014.  2. : 하일ㆍ영오지구 총사업비 변경(180억→216억 증36억)

□ 2014.  3. : 하일ㆍ영오지구 본선구간 관로부설 사업준공(58.2㎞)

□ 2014.  4. ~ 2016. 12. : 영오 외 6개면 신규급수 지역 지방상수도 인입 착공 및 준공(42개 마을 1,200가구 3,450명)-67.6km

기대효과

□ 지방상수도 미급수지역(7개면 3,450명) 안정적 상수도 공급으로 군민의 삶의 질 향상과 주거환경 개선

위치도

	상하수도사업소

동해지방상수도 확장사업

□ 기반시설(상수도)확장 개선을 통한 원활한 대규모개발사업 추진지원

□ 안정적인 생활용수공급으로 지역주민들의 정주생활환경 개선

추진개요(현황)

□ 사업 대상지 : 동해, 거류면 일원

□ 사 업 기 간 : 2010. 1 ~ 2017. 12(계속사업)

□ 사 업 내 역

지구	사 업 량	사업비(백만원)				비고
		소계	2013까지	2014	2015이후
동해	ㆍ상수관로 L=21㎞ ㆍ배수지 2지 ㆍ가압장 1개소	9,520	4,000	2,800	2,720	광특70% 군비30%

추진상황 및 향후계획

□ 2010. 2. ~ 12. : 동해지방상수도 실시설계 완료

□ 2011. 2. ~ 2014. 2. : 거산배수지1지(3,000톤) 본선관로 3㎞준공(500㎜)

□ 2014. 3. ~ 2015. 3. : 본선관로 6.1㎞ 추진중(350㎜)

□ 2014. 8. ~ 2014.12. : 고성군 수도정비 기본계획 부분 변경 및 동해지방상수도 총사업비 변경(95억→135억 : 환경부)

□ 2015. 3. ~ 2017.12. : 잔여 관로(11.9㎞) 및 신규 급수공사 준공

기대효과

□ 지역민 및 조선산업단지 조성지역에 안정적 생활ㆍ공업용수 공급

문제점 및 대책

□ 지1010호 확포장(한내~덕곡간 9.2㎞, 4차선)계획과 중복 노선으로 연계 추진 필요성에 따라 사업기간이 유동적임.

⇒ 사업구간중 우회노선 4.1㎞, 국도77호 2.7㎞ 우선 시행하고 잔여구간의 사업은 효율성을 위해 도로사업과 연계 추진함.

위치도